Mestská časť  Bratislava - Dúbravka

Materiál na 22. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 3. novembra 2009

Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána
Informácia o stave realizácií projektu

Predkladateľ:                                                                  Materiál obsahuje:

Ing. Ján Sandtner                                                       1.  Uznesenie MR
    starosta						2.  Návrh uznesenia                                                                   
							3.  Informačná správa 
4.	Projekt stavby- prezentácia

Spracovateľ:
Ing. Ján Rőssel

november 2009

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

A.	berie na vedomie 
       informácia o stave realizácie projektu Urnový háj pri kostole sv. Kozmu  
       a Damiána.

B.	ukladá prednostovi miestneho úradu
     
	1. zabezpečiť vyhotovenie geologického prieskumu  podložia lokality minimálne 	    v troch sond.
	   							Termín: do 5.11.2009

	2. zabezpečiť výberové konanie verejným obstarávaním na zhotoviteľa diela 
	    a podpísanie zmluvy na dielo							
	   							Termín: do 30.11.2009
							
	3. začať  realizáciu projektu 1. etapou 
	
	   							Termín: do 10 dní po podpísaní							                            zmluvy o dielo 
                                                                                               TK:        31.3.2010 

2. Uznesenie MR

k bodu č. 5 : Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána.

Uznesenie  MR  č. 293/2009

Miestna rada 
A.	berie na vedomie 
informáciu o stave realizácie projektu Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána s pripomienkami:
1.	spracovať statický posudok k realizovanej stavbe.
2.	zabezpečiť geologický prieskum v danej lokalite.
 
B. odporúča
predložiť materiál na  zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
 
Hlasovanie :	       prítomní : 7         za : 7          proti : 0	  zdržali sa : 0 

-1-

3. Dôvodová správa

Tento materiál nadväzuje na  uznesenie 
k bodu č. 6 : Urnový háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána

Uznesenie  MZ  č. 258/2008
Miestne zastupiteľstvo
A. berie na vedomie
   Informáciu o príprave a realizácii projektu  „ Urnový  háj pri kostole sv. Kozmu a Damiána“

B. žiada
starostu mestskej časti zabezpečiť komplexné riešenie územia obstaraním urbanistickej štúdie ako podkladu pre zmenu ÚPN mesta Bratislavy, s možnosťou rozšírenia cintorína

	V programovom rozpočte Mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2009
bol schválený v Miestnom zastupiteľstve m.č. Bratislava – Dúbravka dňa 7. apríla 2009 uznesením č. 336/2009 prevod finančných prostriedkov z FRB v sume 66 387 EUR,
 t.j. 2,00 mil. Sk.

Chronológia postupnosti činností prípravy a realizácie projektu
Urnový háj pri kostole sv. Kozmu

1.	16.9.2008

Miestne zastupiteľstvo na svojom 13. zasadnutí dňa 16. septembra 2008  prijalo uznesenie MZ č. 258/2008 v časti B.  v ktorom žiada starostu mestskej časti zabezpečiť komplexné riešenie územia obstaraním urbanistickej štúdie ako podkladu pre zmenu ÚPN mesta Bratislavy, s možnosťou rozšírenia cintorína.

2.	1.7.2009

Zriadenie komisie na vyhodnotenie ponúk v zmysle § 40 zákona č. 25 Z.z. o verejnom obstarávaní na Spracovanie projektovej dokumentácie Urnový háj pri kostole sv. Kozmu 
       Kritériumna vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

3.	3.8.2009

     Výber zhotoviteľa. Víťazom  súťaže sa stal uchádzač
       Ing.  arch. Marián Malovaný, PhD s najnižšou cenovou ponukou 8570 EUR

4.   20.8.2009

      Podpísanie zmluvy o dielo s víťazom súťaže

-2-

5.   30.9.2009

       Ing.arch. Marián . Malovaný, Phd. odovzdal  6 paré projektovej dokumentácie projektu
      Urnový háj pri kostole sv. Kozmu

6.	5.10.2009

Začatie územného konania – ohlasovacia povinnosť
 
7.   november 2009.	

      Výber zhotoviteľa diela verejným obstarávaním	
.   
8.   december2009

      Zahájenie prác- zemné úpravy

Realizácia projektu

Celé dielo pozostáva z týchto objektov:
SO. 01     Chodníky a spevnené plochy
SO. 02     Oporné múry
SO. 03.1  Hlavné schodisko
SO. 03.2  Obradné miesto
SO. 03.3  Oddychové miesto
SO. 03.4  Picia fontánkaSO.0 
SO. 04     Oplotenie
SO. 05     Prípojka vody
	     Prípojka kanalizácie
SO. 06     Verejné osvetlenie
                Sadové úpravy

Základné parametere urnového hája:

		Celková rozloha            3 800 m2
		Počet urnových miest :   1800
		Počet rodinných hrobiek   120	

Práce na jednotlivých stavebných objektoch budú rozdelené do dvoch etáp. V prípade priaznivého počasia sa realizačné práce na projekte začnú zemnými úpravami a stavbou oplotenia už v decembri 2009.

 Vizualizácia riešenia projektu Urnový háj pri kostole sv. Kozmu   a Damiána bude vykonaná spätnou projekciou počas rokovania o tomto bode.

-3-